О внесении изменений в постановление мэрии
городского округа Тольятти от 30.12.2012 г. № 3844-п/1
 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Восстановление и ремонт ливневой
канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.»

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от                12.11.2014 г. № 512 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 г. № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании  постановления  мэра  городского  округа  Тольятти  от     05.06.2008 г.  № 1252-1/п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», руководствуясь  Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от  30.12.2012   г. № 3844-п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.» (далее - Программа) (газета "Городские ведомости", 2013, 18 января, 26 апреля, 02 июля; 2014, 21 января, 11 июля,      24 октября, 19 декабря) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в столбце 2 строки «Объемы финансирования» цифры «39346»  заменить цифрами «22450», цифры «16896» заменить цифрой «0».
1.2. В разделе III Программы «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы»:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «3720,43» заменить цифрами «1480,43».
1.2.2. В абзаце четвертом цифры «23» заменить цифрами «15».
1.2.3. Абзац пятый исключить.
1.2.4. В абзаце шестом цифры «200» заменить цифрами «20».
1.2.5. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- отремонтированы сооружения ливневой канализации -2 ед.».
1.2.6. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
                                                                                               «Таблица 1
Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации 
городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.»
№
п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя	
			Текущий год	Плановый период
 (прогноз)	
				2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз) 	2015 год (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Цель: повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.	
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.	
1.1.	Снижение объема загрязнений в прудах – накопителях	куб. м	-	-	-	-	
1.2.	Длина прочищенных коллекторов ливневой канализации городского округа Тольятти 	м	1825	655,63 	824,80	-	
1.3.	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	ед.	9	6	9	-	
1.4.	Длина трубопроводов ливневой канализации, проверенных с помощью телеинспекции	м	2815,0	-	-	-	
1.5.	Оформленные технические планы по результатам проведения инвентаризации сетей и сооружений ливневой канализации	комплект	42	-	20	-	
1.6.	Длина отремонтированных сетей и количество отремонтированных сооружений ливневой канализации	м/ ед.	-	-	-/2	-	
».
1.3. В разделе в IV Программы «Перечень мероприятий» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
«Восстановление и ремонт ливневой канализации 
городского округа Тольятти в 2013–2015 гг.»
№ п/п	Наименование цели, задач и мероприятий	Срок исполнения	Объем средств, направляемых на реализацию ведомственной целевой программы из бюджета городского округа Тольятти, тыс. руб.	
			Всего	в том числе:	
				2013 год	2014 год	2015 год	
Цель: повышение надежности работы ливневой канализации, улучшение условий жизни населения в связи с повышением степени благоустройства, связанного со своевременным отведением дождевых стоков с автодорог, внутриквартальных территорий, подвальных помещений социально значимых объектов городского округа Тольятти.	
Задача: Проведение комплексной очистки и реновации существующих трубопроводов ливневой канализации.	
1.1	Очистка пруда – накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина	2013-2015гг.	-	0	0	0	
1.2	Очистка прудов – накопителей, расположенных в районе детской многопрофильной больницы	2013-2015гг.	-	0	0	0	
1.3.	Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации г. о. Тольятти: 100 кв., ул. Радищева, ул. Громовой	2013-2015гг.	3774	1706	2068	0	
1.4.	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации:            по ул. Механизаторов в районе д.23; ул. Громовой в районе д.43; б-р Космонавтов напротив д.№2; ул. 70 лет Октября, 57; ул. Революционная, 7, 11; по Приморскому б-ру, 46; по ул. 70 лет Октября, 55; ГСК №8 «Приморский» по адресу б-р Королева 15а; б-р 50 лет Октября 3, 17, 30, 52; детский сад №49 «Веселые нотки» ул. Мира 49; детский сад №27 «Лесовичок»; детский сад №90 «Золотое зернышко»; б-р Кулибина, 15; ул. Жукова, 18, ул. Мурысева, 93а; б-р Курчатова в районе 11 – ДС – 2; б-р Туполева 16; пр. Ленинский (местный заезд 9 кв); проезд от ул. Юбилейной до ул. Революционной (32 кв); ул.Победы 50; ул.Родины 24; пер.Чернышевского; ул.Мира 152; ул.Ленина 64,67; ул.Республиканская 12; ул.Жилина 48; К. Цеткин; остановочные комплексы по пр. Ст.Разина; пешеходные переходы между 5 и 9 кв.; пешеходные переходы между 3а и 3б кв.; в районе  рынка "Фаэтон" по ул. Громовой перед пересечением с трассой М5; в районе  д.№56 по ул. Ушакова и детского сада «Красная гвоздика»; между домами №5 по бульвару 50 лет Октября и №40 по ул. Лесная; в районе  д.11 по б-ру Королева.	2013-2015гг.	5641	
2654
	2987	0	
1.5.	Телеинспекционная проверка трубопроводов ливневой канализации ул. Белорусская;  ул. К. Маркса	2013-2015гг.	0	0	0	0	
1.6.	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет): подключения от дождеприемников на сетях  Автозаводского района	2013-2015гг.	763	0	763	0	
1.7.	Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации: восстановление колодцев и камер по лесной зоне от ул. Баныкина до пруда-накопителя; перекладка сети дождевой канализации в районе  Речного порта; ливневые насосные станции по ул. Коммунистическая,120, ул. Баныкина, 45.	

2013-2015гг.	

12272	

   4462	

   7810	

      0	
	Итого по задаче:		22450	8822	13628	0	
	Итого по программе:		22450	8822	13628	0	
».
1.4. Раздел V Программы «Социально-экономические последствия реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит улучшить условия жизни населения. Своевременное отведение дождевых стоков с автодорог и внутриквартальных территорий повысит степень благоустройства городского округа Тольятти.
Для своевременного отведения осадков с улиц города будет восстановлена пропускная способность 1480,43 м коллекторов ливневой канализации, смонтировано 15 дождеприемников на существующих сетях ливневой канализации; отремонтировано 2 сооружения ливневой канализации».
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти  (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по городскому хозяйству Анташева С.А.

Мэр		                                                                                          С.И.Андреев